건 설 과

주민 숙원사업 추진

내실 있는 건설행정 추진

1

○ 연순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장대화시 주민들이

건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고

- 2011년 해결 : 426건 접수/355건 추진(해결율 83%)

- 2012년 해결 : 410건 접수/350건 추진(해결율 85%)   -00건의의 접/추진(해결율 90%)

❍

추    :       ○

❍○  ❍❍ 등록 현황  : 207개 □ 추진계획  : 전문건설업  유지 □ 추진계  문건설업 적법 유지84, 토공 39, 상하수도 40, 기타 190)상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료주민 숙원사업 해결율 향상

목 표	주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

○ 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료

- 2013. 02.   : 실시 설계

- 2013. 03.   : 공사 착공

- 2013. 06.   : 공사 준공

○ 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료

- 2013. 08.   : 실시 설계

- 2013. 09.   : 공사 착공

- 2013. 12.   : 공사 준공

※ 업무담당자의 적극적인 해결 의지로 해결율 향상

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
10,000 (시비)	5,686 (시비)	4,314	4,548(80%)

담당부서	건설과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 우홍민	☏8892

1

❍ 전문 건설업의 체계적인 등록 관리로 견실한 건설공사 시공

❍ 국유재산의 효율적 운영으로 세외수입 증대

❍ 옥외광고물의 일괄처리시스템 구축으로 쾌적한 도시미관 조성

1. 전문 건설업 등록관리

지 표	전문 건설업의 적법 유지율 95%

❍ 등록현황 : 207개 업체, 353종 (철콘 84, 토공 39, 상하수도 40, 기타 190)

❍ 관    리 : 전문건설업 등록 기준인 실질자본금, 기술인력, 시설장비 등

등록사항 법정 기일내 신고 안내 ⇒ 행정처분등 불이익 사전예방

2. 국유재산 대부료 부과 (국토해양부 소관)

목 표	국유재산 대부료 부과 징수율 90%

❍ 관리현황 : 18,672필지, 17,083천㎡

❍ 국유재산 대부료 고지서 발송                 : 2013.   3.

❍ 납부 독려 실시                             : 2013.   3.～4.

3. DB구축으로 옥외광고물의 효율적 관리

목 표	DB 구축율 100%

❍ 개요 : 11,008개(고정 광고물), 111백만원(시비), 2013. 01.～12.

❍ 내용 : DB구축을 위한 전수조사 및 관리전용 시스템 구축

❍ 옥외광고물 전수조사 계획수립 및 용역    : 2013. 01.～02.

❍ PDA 활용한 전수조사(사진촬영, 지도검색, 정보입력 등)    :  2013. 03.

❍ 레이저 측정기를 이용한 규격 측정, 데이터 입력화  : 2013. 04.～09.

❍ 통합관리 시스템 운영 및 새올행정시스템 구축  : 2013. 11.～12.

4 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
111(시비)	32(시비)	79	32(100%)

담당부서	건설과	건설행정팀장 김우봉	☏8881	주무관 염규석 주무관 김윤기	☏8883 ☏8885

주민 숙원사업 추진

소규모 주민숙원사업 추진

2

○ 연두순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장대화시 주민들이

건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고

- 2011년 해결 : 426건 접수/355건 추진(해결율 83%)

- 2012년 해결 : 410건 접수/350건 추진(해결율 85%)

- 2013년 계획 : 500건 접수/450건 추진(해결율 90%)

□ 추진계획  : 주민  ❍❍숙  원사업 해결율 향상

목 표	주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

○ 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료

- 2013. 02.   : 실시 설계

- 2013. 03.   : 공사 착공

- 2013. 06.   : 공사 준공

○ 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료

- 2013. 08.   : 실시 설계

- 2013. 09.   : 공사 착공

- 2013. 12.   : 공사 준공

※ 업무담당자의 적극적인 해결 의지로 해결율 향상

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
10,000 (시비)	5,686 (시비)	4,314	4,548(80%)

담당부서	건설과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 우홍민	☏8892

1

❍ 연두순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장대화시 주민들이

건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고

- 2012년 해결 : 410건 접수/350건 추진(해결율 85%)

- 2013년 계획 : 500건 접수/450건 추진(해결율 90%)

․ 사 업 량 : 450건/10,000백만원  ․ 사업기간 : 2013. 1 ~ 12월

1. 주민 숙원사업 해결율 향상

지 표	주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

❍ 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료 (209건 3,800백만원)

- 2013. 02.   : 실시 설계

- 2013. 03.   : 공사 착공

- 2013. 05.   : 공사 준공

❍ 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료

- 2013. 08.   : 실시 설계

- 2013. 09.   : 공사 착공

- 2013. 12.   : 공사 준공

※ 업무담당자의 적극적인 해결 의지로 해결율 향상

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
10,000 (시비)	5,686 (시비)	4,314	4,548(80%)

담당부서	건설과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 우홍민	☏8892

군도 ․ 농어촌도로 정비사업 추진

3

❍ 군 도 : 4개노선 L=9.25㎞/12,430백만원

- 군도 17호선(성산~동곡) : L=3.03㎞ B= 8.0m/3,072백만원(계속)

- 군도 24호선(용산~학산) : L=1.62㎞ B=11.0m/2,358백만원(계속)

- 군도 29호선(수원~산제) : L=3.60㎞ B=8.0m /5,400백만원(신규)    - 군도 12호선(문동~국동) : L=1.0㎞ B=8.0m/1,600백만원(신규)

❍ 농어촌도로 : 4개노선 L=3.81㎞/6,208백만원

- 금천 306호선(이내~원촌) : L=1.37㎞ B=8.0m/2,408백만원(계속)

- 노안 101호선(학림~계림) : L=1.06㎞ B=8.0m/1,300백만원(계속)

- 왕곡 208호선(장산~양산) : L=0.68㎞ B=8.0m/1,000백만원(신규)

- 금천 208호선(벽류~원촌) : L=0.70㎞ B=8.0m/1,500백만원(신규)

❍ 사업기간 : 2011. 01. ~ 2015. 12.

1. 군도 ․ 농어촌도로 확포장 공사 추진

목 표	공사추진 공정율 70% 달성(연차적 사업)

❍ 군     도 (4개 노선)

- 2013. 04 : 군도17․24호선 준공

- 2013. 04 : 군도12․29호선 계약심사 완료

- 2013. 05 : 군도12․군도29호선 착공

❍ 농어촌도로(4개 노선)

- 2013. 02 : 왕곡208호선 착공

- 2013. 05 : 금천208호선 착공

- 2013. 12 : 금천306, 노안101호선 준공

※ 미 준공 도로는 확보된 예산의 범위내에서 연차적으로 사업시행

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
18,638(시비)	12,970(시비)	5,668	7,782(60%)

담당부서	건설과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 우홍민	☏8892

농촌 생활환경 정비사업 추진

4

❍ 위    치 : 3개 면(공산면, 금천면, 산포면)

❍ 사업내용 : 기반시설정비, 생활환경개선, 문화복지시설 등

❍ 사 업 비 : 2,277백만원(국비 1,594, 시비 683)

❍ 사업기간 : 2013. 01. ~ 12.

1. 농어촌 생활환경 정비사업

지 표	공사 추진 공정율 100%

❍ 2013. 03.  : 실시 설계 완료

❍ 2013. 04.  : 공사발주 및 착공

❍ 2013. 12.  : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,277 (국비1,594 시비683)	2,277 (국비1,594,시비683)	-	1,366 (60%)

담당부서	건 설 과	농업기반팀장 송영용	☏8901	주무관 남영호	☏8903

기계화 경작로 확 ․ 포장공사

5

❍ 위    치  : 13개 읍․면중 6개 면 선정 예정

❍ 사 업 량  : 경지정리 지구 농로포장 및 사리부설 L=15km

❍ 사 업 비  : 1,000백만원(국비 700, 도비 90, 시비 210)

❍ 사업기간  : 2013. 01. ~ 08.

1. 기계화 경작로 확․포장 공사

목 표	공사 추진 공정율 100%

❍ 2013. 01.  : 사업 대상지 결정 (6개 지구)

❍ 2013. 02.  : 실시설계 및 사업시행 승인신청(전라남도)

❍ 2013. 03.  : 공사 착공

❍ 2013. 08.  : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
1,000 (국비 700, 도비 90, 시비 210)	1,000 (국비 700, 도비 90, 시비 210)	-	800 (80%)

담당부서	건 설 과	농업기반팀장 송영용	☏8901	주무관 남영호	☏8903

향상된 도로 유지관리 추진

6

❍ 시 관리도로 : 337개 노선 1,077km(국도,시군도,농어촌도로)

❍ 중점정비대상 :20노선 120km(국도 3, 시가지 도로 17)

❍ 사업 개요

- 아스콘 재포장 및 파손부 복구 : 12개 노선 1,000a, 1,076백만원

- 도로 차선도색 및 시설물 정비  :  8개 노선 7.0km,   807백만원

- 교량 정밀 점검 및 보수        :  7개소             190백만원

❍ 사업 기간 : 2013. 01. ~ 08.

1. 신속한 도로시설물 보수로 쾌적한 도로환경 조성

지 표	도로 이용 불편사항 신고 감소율(전년도 대비 5% 감소)

❍ 2013. 01.  : 시설물 보수 대상지 조사

❍ 2013. 02.  : 실시 설계

❍ 2013. 04.  : 사업 착공

❍ 2013. 08.   : 사업 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,073(시비)	2,073(시비)		1,658(80%)

담당부서	건 설 과	도로관리팀장 마상익	☏8911	주무관 최남철	☏8912

가로(보안)등 설치 및  유지관리

7

❍ 사업 내용

- 가로(보안)등 유지보수 단가계약(3개 권역) : 465백만원

- 가로등 유지보수(긴급보수)                :  30백만원

- 가로(보안)등 신규 설치공사               :  75백만원

❍ 사업 기간 : 2013. 01. ~ 12.

1. 가로(보안)등 설치 및 체계적인 유지관리

지 표	가로(보안)등 고장수리 민원 해결율 (100% 달성)

❍ 2013. 01.  : 가로등 신규 설치 대상지 현지조사

❍ 2013. 02.  : 3개 권역 가로등(보안등)유지보수 단가계약

❍ 2013. 04.  : 가로등 신규설치 공사 착공

❍ 2013. 06.   : 가로등 신규 설치공사 준공

❍ 2013. 12.   : 가로(보안)등 유지보수 및 긴급보수 연중 추진

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
570 (시비)	405 (시비)	165	337 (83%)

담당부서	건 설 과	도로관리팀장 마상익	☏8911	주무관 조장훈	☏8914

2013년 주요업무계획